장례식장 리모델링공사

설계용역 과업지시서

2019. 05.

충청남도서산의료원

제1장  총칙

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “충청남도 서산의료원 장례식장 리모델링공사 설계용역”이라 한다.

2. 적용 범위

본 과업지시서는「충청남도 서산의료원 장례식장 리모델링공사 」설계용역 입찰에서 낙찰자로 선정되어 설계용역 계약을 체결한 자가 준수하여야 하는 사항을 명시한 것이다.

3. 발주기관 및 계약상대자

과업의 편의상 용역발주자인 서산의료원을 “갑”이라 하고, 본 용역의 수급자인 용역수행자 등을 “을”이라 한다.

4. 과업의 개요

가. 대지위치 : 충청남도 서산시 중앙로 149

나. 장례식장 리모델링공사 건물규모

(1) 연면적 : 리모델링1,684.03㎡

지상1층	안치실, 사무실, 주방, 기계실, 영결식장등
2층	분향실 3실 리모델링공사
3층	분향실 2실 리모델링공사

※ 설계과정에서 “갑”과 “을”이 협의하여 조정할 수 있다.

다. 공사비 예산액 : 약 2,000,000,000원 (부가가치세 포함)

(1) 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 인테리어 등의 전분야를 총망라한 일체의 설계로 하되, 전기분야는 전력기술관리법, 소방분야는 소방시설공사업법, 통신분야는 정보통신공사업에 의거 설계용역를 하도록 한다.

(2) 규모는 예산실정에 맞도록 발주처와 협의하에 계획

라. 과업기간 : 착수일로부터 90일(공휴일 포함)로 한다.

(1) “갑”의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 “을”은 내역서 수정 등 “갑"의 요구에 응해야 한다.

(2) 심의관련 기간은 용역기간에서 제외한다.(기본설계등 심의기간을 별도로 정산하여 산정한다)

(3) 다음의 경우에는 “갑”이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

(가) 계약기간의 연장

(나) 불가항력

(다) 기술용역의 일시정지

(라) 계약상대자의 기술용역 정지 등

(마) 발주기관의 사업계획 변경 등으로 과업내용이 변경되었을 경우

5. 과업의 범위

가. 설계 범위

건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 인테리어, 기타 부대공사에 대한 설계도서 및 부대업무 도서의 작성

※ 설계도서는 관련기관(부서) 협의 결과사항이 반영이 되어야 함

나. 용역 범위

(1) 계획설계도서 작성(2개안 이상 대안제시 포함)

(2) 중간설계도서 작성 – 기본설계심의 자료

(3) 실시설계도서 작성 – 실시설계심의 자료

(4) 기존 시설물에 현장조사․검사 업무

(5) 각종 심의, 건축 인․허가(건축협의․실시계획인가(준공) 등), 계약심사 등 절차 이행(협조) 및 관련도서 작성

※ 공사완료시 건축법시행규칙 제22조에 따른 구비서류 작성 포함

(6) 과업 수행과 관련하여 “갑”이 필요하다고 인정하여 요구하는 업무

(7) 공사 중 장례식장을 운영할 수 있는 단계별 공사계획

(8) 내진성능평가(별도발주) 결과 내진구조설계 반영

다. 하도급의 범위

(1) “을”은 “갑”으로부터 도급 받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

(2) “을”은 “갑”이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으나, 하도급 된 당해 업무에 대하여도 책임을 진다

(3) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같으며, 관련법령에 의거 전문분야의 활동주체 등록을 필한 자에게 하도(용역)를 하여야 함

(가) 각종조사, 측량 및 이와 유사한 작업

(나) 구조계산

(다) 건설공사의 수량 및 견적업무(적산)

(라) 건축기계설비 등 업무

(마) 기타 발주기관이 설계업무와 관련하여 인정하는 업무

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. “을”은 용역착수 시에 다음 서류 2EA를 제출한다.

(1) 착수계 1부.

(2) 책임기술자 선임계[붙임1] 1부.

(3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 1부.

(4) 과업수행계획서(예정공정표 포함) 1부.

(5) 설계용역수행 조직표(연락처 기재) 1부.

(6) 각 공종 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등 각 1부.

※ 분야별 책임기술자의 경우 관련법령에 의한 신고 등 면허를 소유한 자 이어야 함

(7) 설계용역 예정공정표 1부.

(8) 보안 각서 1부

(9) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. “을”은 착수계 제출 후 4일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 과업 진행 전반에 대하여 설명 하여야 한다.

(1) 건축법규 등 관련법규 검토 후 건축가능여부에 대한 보고 포함

다. 계획설계(2개안 이상)도서 납품

(1) “을”은 과업내용에 대하여 “갑”이 임명한 감독관과 협의하여야 하며, 최종 승인 후 납품하여야 함

(가) 계획설계의 경우 2개 이상 대안을 구분하여 제출

(나) 세부 제출도서는 계획설계 납품목록을 참조

라. 중간설계도서 납품 (보건복지부 기본설계 심의)

(1) “을”은 과업내용에 대하여 “갑”이 임명한 감독관과 협의하여야 하며, 최종 승인 후 납품하여야 함

(2) 세부 제출도서는 중간설계 납품목록을 참조

마. 실시설계도서 납품 (실시설계 심의)

(1) “을”은 과업내용에 대하여 “갑”이 임명한 감독관과 협의하여야 하며, 최종 승인 후 납품하여야 함

(2) 세부 제출도서는 실시설계 납품목록을 참조

바. 기타 서류

(1) 용역의 진도보고는 주간, 월간 공정보고를 한다.

(2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

“을”은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다

가. 업무보고

(1) 주간공정보고

매주 지정하는 날에 지정양식에 의거 “갑”에게 제출(감독관 경유)한다.

(2) 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 지정양식에 의거 “갑”에게 제출(감독관 경유)한다.

(3) 수시보고

설계용역 진행시 문제점 발생시에는 문제점 분석 및 대안을 제시 하여 “갑”에게 제출(감독관 경유)한다.

나. 업무회의

(1) 일반사항

(가) “을”은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 “갑”과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

(나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

(다) “을”은 각종 회의 시 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성 및 참석토록 하여야 한다.

(2) 업무 착수회의

(가) 착수회의는 착수일로부터 4일 이내 일자를 협의하여 개최한다.

(나) 업무착수회의 시 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행 계획 및 건축법규 등 검토내용을 통한 건축가능 여부 등을 설명하여야 한다.

(3) 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고회(필요시)

(가) “갑”이 필요하다고 인정되어 계획설계 보고회를 개최할 경우, “을”은 지정된 일자에 계획설계 성과에 대하여 보고하여야 한다.

(나) 보고회 발표일 2일전까지 발표 자료를 “갑”에게 제출하여야 한다.

(4) 수시 회의

(가) 설계용역 중 문제점이 발생하거나 계획설계(안), 중간설계(안)에 대한 “갑”과 협의 및 결정을 위한 자료작성 및 준비를 하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재 등을 직접 구매토록 규정하고 있으며,「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

나. “을”은 상기 운영기준 제9조(심의안 작성 등)에 의거 해당되는 자재 리스트 및 관급자재선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

4. 보안성 검토

가. “을“은 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. “을”은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

(1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

(2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

(3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

(4) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임을 “을”에게 있다.

제3장  설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의 계획 및 이용에관한 법률, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급 촉진법, 등 관계법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고 관계기관(부서)와의 인가(도시계획시설), 건축협의, 심의(디자인) 등 완료된 것이어야 한다.

나. 본 과업에 대한 세부시행기준은 “국토교통부 고시 제2015-911호(2015.12.08)”에 의거 계획설계․중간설계 및 실시설계를 수행하여야 한다.

다. 설계도서 작성기준의 경우 상기 고시 내용 및 “국토교통부 고시 제2016-1025(2016.12.30)”에 의거 작성하여야 한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상

(1) 설계도서는 “을”의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인해 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상책임을 진다.

(2) “을”은 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 등 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고 공사 착수 시 관련기관(부서)에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

(3) 추후 공사진행에 따라 발생되는 설계변경 및 기타 사항 등에 대하여 “갑”의 요청이 있을 경우 “을”은 과중한 요구가 아니할 때 설계자 성실의무로써 조건 없이 이에 응하여야 한다.

(4) 공사 중 설계도서에 관련된 시공사 및 감리자의 문의 및 질의사항에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

2. 설계 일반 지침

(1) 기본설계(계획설계+중간설계)

1) 기존건축물의 구조상 안전여부 및 지반조사, 개· 보수건축물 규모, 용도,          구조등 기본적인 조건을 비교 ․ 검토하여 2가지 이상 계획설계안을 제          시하여 발주청이 선택할 수 있도록 보고서를 제출 하여야 한다.

2) 제출시기 : 착수일로부터 10일이내 제출

3) 기본설계(계획설계+중간설계) 검토내용

① 건축물 배치계획, 규모, 구조, 내· 외부마감 재료(기존 마감재료 고려) 검토

③ 각 사업별 층별 평면배치계획

④ 개략설계에 따른 공사비 추정금액 산출

⑤ 각종 관련법 적합토록 설계반영여부

⑥ 기타 사항 등 검토

4) 기본설계(계획설계+중간설계)보고서에는 다음사항을 포함되어야 한다.

① 조사 비교․ 검토내용, 설계기본도서(건축계획서, 설계개요, 배치도, 평             면도, 입면도, 주단면도, 동별개요, 각실별 용도 및 면적, 건물 내· 외             벽 마감재료, 설비계획 개요, 가구 및 장비 배치도, 변경 전·후의                도면, 건축사의 안전진단확인서 등, 도면은 A3 size평철 백상지)                 가 포함되어야 한다.

② 사업지원단의 요구에 대한 건축기본설계(계획설계+중간설계)심의(1차     심의)신청시 필요한 서류 일체

(2) 실시설계

수급인은 기본설계(계획설계+중간설계)를 바탕으로 실시설계를 수행하여         야 한다.

1) 일반지침

① 수급자는 본 과업지시서와 관계법령, 규정, 기준 등 제반사항 및 현장            조사 등 관계부서에서 수집한 자료를 충분히 분석․ 검토하여 본 사업            이 목적하는 바를 달성할 수 있는 최적의 설계가 되도록 하여야 한다.

② 공사비 산정은 건설교통부 및 정보통신부 제정 표준시방서 및 각종시            방서와 건설공사 표준품셈, 정부 노임단가를 기준으로 적용한다.

③ 본 공사에 필요한 골재원 및 콘크리트제품 생산공장, 아스콘 및 레미            콘 공장 등을 조사하여 위치, 운반거리, 가격 등을 비교, 검토한 후 설            계에 반영한다.

④ 설계예산서 작성은 회계예규 공사원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙            에 의거 작성하여야 한다.

⑤ 본 과업 실시설계는 조사자료 등을 참조하여 설계하되 감독원과 협의            하여 작성한다.

⑥ 민원이 야기될 우려가 있는 곳은 이를 고려한 공법이나 대책을 강구하            여 설계하여야 한다.

⑦ 시설 후 유지관리 측면을 최대한 고려하여 설계한다.

2) 세부설계지침

① 각종구조물설계

가. 각종 구조물은 건설교통부가 제정한 표준도를 기준으로 구조계산을               하여야 한다.

나. 오수 및 배수시설물 등의 설계는 기존구조물과 가장 합리적인 연결               되도록 하여야 한다.

다. 구조물에 대하여는 유지관리 및 구조물의 안전도를 고려하되 시공               성 및 경제성 등을 비교 검토하여야 한다.

② 상․ 하수도설계

가. 지하매설물(상수도, 하수도, 전기, 통신 등)배치 및 교차부위를 감안               하여 하수관등의 위치를 결정하여야 한다.

나. 배수설계는 기존수로를 고려하여 계획하여야 하고 배수구조물의 단               면결정은 수리계산에 의하여 설계하여야 한다.

다. 오․ 우수 배출시설이 분리지역인지 합류지역인지 여부를 관련부                서(수도사업소)에 확인 후 분류지역인 경우에는 기존 오수관로에                연결되도록 설계하여야 한다.

라. 관종 및 접합은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 결정한다.

③ 건축계획

가. 배치계획은 건축법 등 관련규정에 적합하고, 시설의 규모, 용도, 기               본건물형태 및 동선관계 등 전반적인 사항을 고려하여 가장 효율적               인 설계가 되도록 한다.

나. 평면, 입면계획 시 자연 채광, 통풍을 최대한 고려 되도록 설계한다.

다. 건축의 형태 및 내· 외부재료 마감은 기존건축물 형태와 조화가 되               어야 하고, 영구적이고 내구적이며 보수가 용이하도록 설계한다.

라. 각 층별 용도 및 기능에 따라 유기적인 동선체계가 될 수 있도록                하여야 한다.

마. 건물 구조는 기존건물구조를 바탕으로 영구적인 구조로 하되 건물               의 기능, 구조, 설비 등을 종합적으로 분석하여 조형성, 시공성, 안               전성, 유지관리 등을 고려하여야 한다.

바. 신체장애자, 노약자등을 위한 편의시설 등을 관련법에 적합하게 설               계하여야 하며 이용에  편리하도록 계획하여야 한다.

사. 실의 마감은 실의 용도 및 기능에 맞도록 선정하여 쾌적한 실내공               간을 창출 및 이용에 편리 하도록 하여야 한다.

아. 평면계획 시 국고지원 세부사업계획서를 기준으로 사업배경 및 목               적에 부합하도록 용도 및 시설을 설치한다.

※ 각 사업별 평면계획은 상황에 따라 변경될 수도 있음.

자. 내부평면계획은 관련부서 등의 의견을 수렴한 후  내부 용도 및 실               면적을 결정한다.

차. 내부평면계획은 상호실간의 동선에 불편이 없도록 계획하여야 한다.

카. 단면계획 시 수직동선의 원활을 고려하여야 하며, 실의 천정고는 적              정체적을 계산하여 실내 체적감에 의하도록 계획되어야 한다.

타. 구조계획은 경제성, 안전성 및 시공성을 고려하여 합리적인 계획이               되도록 하여야 하며, 고정하중, 적재하중, 적설하중 및 풍하중등은               건축법, 건축물의구조기준등에관한규칙등 관련법 규정에 적합하도               록 설계하여야 한다.

파. 흠음, 방음계획은 실의 기능을 고려하여 내부가 쾌적한 분위기를 가               질 수 있도록 고려하여야 하며 특히 소음으로 인한 민원이 발생되               지 않도록 설계한다.

④ 설비계획

가. 시설별 요구조건에 충족할 수 있는 방식을 채택하고 모든 자재는                에너지절약형 자재를 우선적으로 선정한다.

나. 전기․ 통신․ 냉난방․ 환기․ 위생 등 모든 설비계통은 최신의                시설방식을 원칙으로 하며 유지 관리보수 비용은 극소화하도록 한다.

⑤ 전기․ 통신설비계획

가. 전기, 통신설비는 관계규정에 적합하게 계획하여야 한다.

나. 각종 조명시설은 실․ 내외의 조형성에 맞도록 계획하고, 실의 용도               에 적합한 광원 및 등기구와 실에 맞는 적정 조도로 설계하여야 하               며, 점등 및 소등관리방식을 경제적이고 능률적인 시설이 되도록                설계하여야 한다.

다. 통신설비는 전화설비, 방송설비, 약전설비, 유무선 통신 등으로 구분               검토 되어야 하고 특히 전산설비는 전파에 방해를 받지 않아야 한다.

라. 컴퓨터 온라인 시대를 대비한 폐쇄회로 설치계획을 검토한다.

마. 에너지이용합리화법에 의거 고효율에너지 기자재 보급추진에 관한               규정에 적합하도록 설계 하여야 한다.

바. 구내통신선로설비 등은 배관시설을 설치후 배관교체나 증설시공이               용이한 구조로 설계 하여야 한다.

아. 사무자동화 추세에 따라 각종 사무기기(컴퓨터 등)설치를 장차 증설              을 고려하여 소요회선수 및 제반시스템에 적합하도록 설계한다.

자. 전기, 통신 등 장비용량 및 부하계산을 실시하여 가장 합리적인 시               설이 될 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 기계설비계획

가. 에너지절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 발주처와 협의                하여 반영하고, 특히 기자재 선정 시 에너지 이용합리화법에 의거                고효율에너지 기자재로 인증된 제품을 우선 고려 하여 설계에 반영한다.

나. 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래증설, 변경 및 개보수에 용               이하도록 하여야 한다.

⑦ 소방설비계획

가. 소방법 및 건축법등 기타 관계법에 의거 소방설비(자동화탐지설비,                유도등 등)을 설치 하여야 한다.

제4장  설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. 국토교통부 고시 제2015-911호(2015.12.08.), 제2014-268호(2014.05.21.)를 준수하여야 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 일반사항

가. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 수급인 임의로 판단해서는 안 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

라. 본 과업 관련 특별 고려사항

(1) 설계 시 전기, 통신, 가스설비 인입점, 상·하수도, 우·오수관로 등의 철저한 조사 후 설계

(2) 설계 시 부지 내 기존 시설물 손상방지를 위한 설계

(3) 공사 시 폐기물은 관련법령에 준수하여 설계

마. 기타 발주기관이 요구하는 사항을 반영한다.

3. 분야별 설계요령

가. 기본사항

(1) 기능인력 및 자재수급을 고려하여 공법을 충분히 검토하여야 하며, 공사에 필요한 시공공법 및 건축자재 등은 국내자원을 최대한으로 활용할 수 있도록 설계한다.

(2) 에너지절약 및 환경 친화적인 건설공사를 위한 공법, 설계개념을 적용한다.

(3) 전체 공사비용이 추정공사비 내에서 이루어질 수 있도록 계획하고, 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 기본조사 내용을 반영하여 설계하여야 한다.

(4) 설계도서에 설계에 요구되는 성능과 재질을 구체적으로 명시하여야 하나, 특정제품의 명칭, 사양을 명시하여서는 안 된다.

(5) 인접한 건축물의 직․간접적인 피해가 발생하지 않도록 주변 환경을 철저히 조사․분석하여 공사시행과정에서 예상되는 민원을 최소화 할 수 있도록 설계하여야 한다.

나. 건축분야 설계

(1) 내부 공간, 주변공간은 다목적, 다기능적 활용이 가능한 공간계획이 될 수 있도록 설계하여야 한다.

(2) 공간계획은 장래 기능 및 수용시설의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 공간의 호환성과 유연성을 최대한 고려하여야 한다.

(3) 실내외 주요 마감재는 친환경 자재를 적극 검토하고, 유지 관리비가 적게 들고 내구성이 있으며, 준공후 자재구입이 원활한 자재를 사용하고, 국산자재를 우선적으로 검토하여야 하며, 부득이한 경우 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 감독관의 승인을 득한 후 수입재를 설계에 반영할 수 있다.

(4) 기존시설물과의 관계를 고려하여 프로그램과 동선 등이 원활하게 연결될 수 있도록 출입구 선정 및 본관과의 연계동선을 계획하여야 한다.

(5) 다중이용시설이므로 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 계획한다.

(6) 에너지절약형 입면계획 및 창호계획, 조명으로 에너지를 절감형 구조로 자연환기, 채광, 단을 고려하여 계획한다.

(7) 외부 창호 및 마감재질은 이용자들의 파손 및 위험으로 보호 될 수 있도록 계획한다.

(8) 각 실의 용도, 면적, 특성 및 기존 건물과의 연계를 고려하여 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간으로 계획한다.

(9) 계획된 사업비를 초과하지 아니하며 불필요한 Open Space를 가급적 억제하며 , 유지관리를 고려하여 계획한다.

(10) 인접시설물 보호에 적합한 실행 가능한 최적의 시공법으로 설계한다.

다. 인테리어분야

(1) 장례식장의 장소성, 정체성 등을 고려하여 최적의 공간으로 재창출하여 주민들이 이용하기에 편리하고, 다양한 욕구를 수용하는 공간으로 조성한다

(2) 본 용역의 특징 및 요구사항을 검토하고 창의성을 발휘하여 차별화된 디자인이 되도록 종합적으로 계획한다.

(3) 지역적, 문화적 특성을 고려하고 지구단위계획, 경관계획, 마스터플랜 등의 상위 디자인 개념과의 조화를 도모한다.

(4) 인테리어 디자인은 건축계획과의 연관성을 고려하여 통합 디자인 개념 속에서 차별화된 계획을 지향한다.

(5) 계획의 개념, 주요실 이미지, 공간적 디자인, 마감재의 표현으로 계획한다.

(6) 건물의 메인 로비는 수준 높은 디자인 및 마감재의 표현으로 계획한다.

(7) 계획안은 각 실의 공간계획, 벽면, 천정, 바닥, 문, 창호, 일반가구, 조명기구 등의 디자인 개념과 색상 등이 통합된 체계 속에서 포괄적으로 표현한다.

(8) 세면대, 양변기, 수전 및 각종 전기설비 액세서리 등도 전체적인 디자인 개념 및 색상과의 조화를 고려하여 선정한다.

(9) 주출입구로부터 주요공간을 이동하는 과정에서 사용자가 차별화된 디자인 등을 인지할 수 있도록 구성한다.

(10) 통합 색채계획을 수립하고 인테리어 디자인과 색채계획이 조화되도록 한다.

라. 설비분야

(1) 각 분야 설비는 건축물 용도 및 기능을 고려하고, 에너지 절감, 경제성, 운영성, 유지관리 등을 종합적으로 검토하여 적합한 설비를 적용한다.

(2) 충분한 자료를 수집하고, 개량된 선진설비 방식과 비교․검토하여 최적안을 설계에 반영토록 한다.

(3) 건축 등 타 공사(공정)와 연관되는 부분을 면밀히 검토하여 설계에 반영하고, 원활한 시공 및 기능을 유지토록 하여야 한다.

(4) 설비공간은 향후 장비교체, 유지관리 space 등을 충분히 고려하여 위치, 면적, 층고 및 장비 반입구를 확보하여야 한다.

(5) 초기투자비, 유지관리비, 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적으로 설계한다.

(6) 위생설비 계획시 아래 사항을 검토한다.

(가) 급수량 산정, 관경산정, 급수대상인원 산정, 급탕량 산정, 급탕방식의 결정, 배수방식, 통기방식 등 기초계산 및 각 방식 선정의 적정여부 검토

(나) 각종 수조 용량 및 부속품 취부의 적정여부 검토

(다) 급수 조닝 및 관말 수압에 대한 검토

(라) 펌프 채택시 양수량, 토출측 구경, 소요 동력 등을 검토

(7) 자동제어설비 계획시 아래 사항을 검토한다.

(가) 기능의 적정 여부와 설비등급에 맞는 관리방식을 고려하여 적정 자동제어설비 방식 채택

(나) 송풍기, 급․배수시설 등 각 설비기기의 자동제어방식의 적정여부 검토

제5장  설계도서의 작성 및 납품

1. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(기계, 전기, 소방 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

(1) “설계자”는 계획설계를 진행하고 작업진행시에는 2개 이상의 대안을 제시하여 발주자의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

(2) 설계자가 제출한 2개 이상의 대안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성하여야 한다. 단, 그로 인한 용역비의 추가 및 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

(3) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

(4) 계획설계 제출도서 외 추가로 발주처의 요구사항이 있을 경우 관련서류를 작성하여 제출하여야 한다.

다. 제출도서 목록

구분	제출도서목록	규격	수량	단위	비고
1	계획설계(안)	A3	3	부	․2개 이상 대안 마련(비교분석)
2	현장조사보고서	A4	3	부	․현장답사를 통한 현황조사 내용
3	관련법규검토서	A4	3	부	․제반법규 검토(심의, 인․허가 포함)

※ 실 납품도서는 발주처와 협의하여 정한다.

라. 계획설계(안)의 작성시 포함사항은 아래와 같다.

(1) 설계설명서

(가) 현장조사 보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획 등

(2) 인근 병동과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

(3) 대지 내 동선계획

(4) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

(5) 기타 필요한 사항 및 발주자 요구사항(개략조감도 등)

2. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

(1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 중간설계 완료시 중간설계보고서를 제출하여야 한다.

(2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 분야별로 작성되어야 한다.

(3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

(4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고 도면을 첨부한다.

(5) 재료 및 장비 사용 등을 고려하여 공정별 개략공사비를 산정한다.

다. 제출도서 목록

구분	제출도서목록	규격	수량	단위	비고
1	중간설계보고서	A4	3	부	․세부사항 참조
2	설계도면	A3	3	부	․세부사항 참조
3	투시도 또는 조감도	A3	3	부
5	각종 계산서	A4	5	부
7	디자인 심의도서	A3	협의	부	․인테리어 디자인 관련 도서

라. 중간설계보고서의 내용은 아래사항이 포함되어야 한다.

※ 중간설계보고서는 보건복지부 건축기본설계(1차심의) 신청서에 따른

서류를 포함하여야 한다.

- 기본설계 각 실별 면적표, 배치도, 평면도, 입면도, 주단면도, 설비

계획 개요, 가구 및 의료장비 배치도 등

- 변경 전, 후의 도면

- 기존 건물의 구조변경이 발생할 경우 안전진단확인서

- 공정별 개략공사비

(1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각 층 주용도

(3) 사례조사 : 유사한 사례를 조사, 분석, 검토한 내용(반영사항 표기)

(4) 사전조사 : 상하수도, 전기, 통신, 소방 등 사전조사 시 조사 내용

(5) 공종별 개략공사비

(6) 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

마. 설계서의 구성은 아래와 같다.

(1) 건 축

- 설계설명서

∙공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액(개략) 등

∙설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각 층 주용도

∙사례조사 : 유사한 사례를 조사, 분석, 검토한 내용(반영사항 표기)

∙사전조사 : 지반 고, 지질, 강우량 , 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사 내용

- 구조계획서

∙설계근거기준

∙구조재료의 성질 및 특성

∙제반하중조건에 대한 분석

∙각부 골조계획 : 골조의 평면, 간 사이(span), 층고, 바닥판 구조 등

∙구조성능 : 열, 내화, 차음, 진동 등

∙지진에 대한 고려사항 등

- 도면 종류

∙안내도 : 방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록

∙배치도 : 축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계

∙주차계획도 : 법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차 배치도 및 차량 동선도, 차량진출입 관련 위치 및 구조, 주차장 도면

∙구적도 : 대지면적에 대한 기술

∙건축면적 산출표

∙내․외부마감표 : 바닥, 벽, 천정, 외벽, 지붕 등

∙각 층 평면도 : 기둥․벽․창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강(해당시)위치, 방화구획 및 방화벽의 위치

∙철거도면

∙입면도(2면 이상) : 주요 내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부 마감재료

∙단면도(종․횡) : 건축물 최고높이, 각 층의 높이, 반자높이, 천정내 배관공간, 계단 등의 관계를 표현

∙계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

∙부분상세도 : 평․입․단면 상세도

∙각 층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

∙주요 구조부 단면상세도

∙기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

(2) 인테리어부분

- 설계 설명서

- 도면 종류

∙범례 및 도면목록

∙일반사항 : 범례, 설계기준, 일반사항, 특기사항

∙면적표 : 실별 부위 면적

∙마감재료표 : 실별 바닥, 걸레받이, 벽, 천정재료

∙평면도 : 실 및 부위별 치수, 실명, 면적, 구조, 가구, 마감재료 표기

∙단위평면도, 입면도, 천정도 : 실 및 부위별

∙마감상세도 : 재료 및 부위별 마감상세(재료, 두께, 마무리 등)

∙각종상세도 : 기타 시공상 필요한 부분의 상세(천정, 벽체, 붙박이 가구류 등)

∙실내투시도 : 발주기관 지정부위

∙가구, 사인물, 커텐 : 사양서, 시방서, 제작도면

∙스펙북 : 실내 마감재료

∙기타 실시설계의 기준이 되는 도면

(3) 기계부분

- 설계 설명서

∙설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 비교 검토서 등

- 도면 종류

∙범례 및 도면목록

∙기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

∙배치도 : 상․하수도, 수조, gas 등

∙계통도 : 공조, 위생, 난방, 소화설비, 기타설비의 계통도

∙평면도 : 설비평면도, 냉․난방 배관, 공조 덕트, 위생배관 평면도

∙단면도 : 기준층의 층고 확인할 수 있는 사항

∙기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사 및 보건복지부 실시설계 심의에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하는 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계 관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종 단계를 말한다.

나. 일반사항

(1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

(2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다

(3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

(4) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 용역(최종)보고서의 작성

(1) 설계자는 최종 용역보고서를 제출하여야 하며, 보고서에는 설계에 참여한 참여기술자 명단 및 그의 업무수행 사항 등을 기록하여 제출하여야 한다

(2) 용역(최종)보고서의 수록 내용은 아래와 같다.

- 투시도(소판 사진)

- 각 분야별 설계설명서

- 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리 계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격(좌철)으로 제출

라. 설계내역서의 작성

(1) 모든 설계내역서 작성은 정부 발행 일위대가, 표준품셈등을 적용하여 산출하여야 한다.

(2) 일위대가 적용은 정부 일위대가표에 준하여 작성하되 내역서에 첨부하여 철한다.

(3) 수량의 산출은 설계변경시 물량증감이 용이하도록 공종별, 층별, 부위별로 산출하고 계산식을 분명히 하여야 한다.

(4) 국내 재료의 단가는 다음에 열거한 순서에 의거 결정 한다.

- 국토교통부발행 일위대가

- 조달청발행 정부구매물가 가격정보(나라장터) : 우선 적용

- 대한건설협회 발행(월간) 거래가격

- 사단법인 한국물가협회발행(월간) 물가자료

- 사단법인 한국물가정보 발행 종합물가 정보지

- 위 항목의 물가 시세표에 명시되어 있지 않은 자재는 원가조사 기관에 조회하여 결정한다.

(5) 위 물가시세표등에 표시되지 않은 품목은 생산업체의 견적서(2개 업체 이상)에 의하되 원가 견적서를 첨부하여야 한다.

(6) 운반공사에 사용되는 장비, 운반지(사토장 등), 운반거리, 도로상태 등을 조사하여 내역서, 공사시방서에 명확히 표기하여야 한다.

(7) 내역서의 작성은 일반공사 시방서 순서 및 공사 작업 순서대로 작성한다.

마. 시방서의 작성

(1) 표준시방서를 기준으로 설계 내용에 부합되도록 공사 시방서를 작성하며, 표준 시방에 없는 공종인 경우 별도 전문시방서를 작성한다.

(2) 신공법 적용시에는 공법에 대한 설명과 이에 따른 관계자료 등 검토보고서를 제출하고 담당 감독관과 협의하여야 하며, 협의 후 관계자료를 첨부 한다.

(3) 제출양식은 A4 좌철제본으로 하고, 표지에 수행 용역명, 일자 및 30㎜*30㎜(가로*세로)의 정사각형을 표지 좌측 상단에 표기 후 관리번호를 부여한다. 또한 식별이 용이하도록 제본되는 마구리면에 용역명 및 설계도서명, 공종을 구분하여 명기한다.(특기시방서, 내역서 표지 양식 공통)

바. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종		비 고
					건축	기계
1	용역(최종)보고서	A4	6	부	◯	◯
2	설계설명서	A4	6	부	◯	◯
3	설계도면	A3	6	부	◯	◯	인테리어 포함
4	계산서	A4	6	부	◯	◯
5	내역서	A4	6	부	◯	◯
6	관급내역서	A4	6	부	◯	◯
7	수량산출서	A4	6	부	◯	◯
8	단가산출서	A4	6	부	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	6	부	◯	◯
10	표준시방서	A4	6	부	◯	◯
11	전문시방서	A4	6	부	◯	◯
12	관급시방서	A4	6	부	◯	◯
13	최종 투시도 or 조감도		1	부	◯		표구 포함(발주기관 협의)
14	공정표		6	부	◯	◯	전공종 포함
15	CD-ROM		3	SET	◯	◯	공종별 통합
16	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	보고용 설명서, ppt 결과물 등

사. 기타사항

건물의 준공과 동시에 변경 준공도면 1부 및 변경CD(RW) 또는 USB로 납품하여야 하며, 준공과 동시에 건축물 관리대장을 관련기관에 제출 등재한다.

*설계에 관련한 모든 지적 소유권은 발주원이 가진다.

(1) 설계에 관련한 모든 지적 소유권은 우리의료원이 가진다.

(2) 설계과업 추진 시 업무협의는 담당분야별로 책임기술자와 담당참여 기술자가 동시에 참여하여 충실한 설계용역이 이루어질 수 있도록 한다.

(3) 용역자는 설계 시 지시사항의 미비 또는 의문사항, 이견이 있을 우리의료원 담당자와 상호 협의 조정하여야 하며, 의견이 미 조정시에는 우리의료원 담당자의 지시에 따라야 한다.

〔붙임 1〕

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                      공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2019.   .   .

4. 착수  일자 : 2019.   .   .

5. 완수예정일 : 2019.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2019년 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

서산의료원 재무회계팀 귀하

〔붙임 2〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                     공사 설계용역

2. 계약  일자 : 2019 .   .   .

3. 착수  일자 : 2019 .   .   .

4. 완수예정일 : 2019 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제9절 2(기술지식의 이용 및 비밀엄수의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 국가기관용 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2019년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

서산의료원 재무회계팀 귀하

〔붙임 3〕

주간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2019년  월  일 ~ 2019년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(201 . . .)	금주예정사항(201 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

서산의료원 재무회계팀 귀하

〔붙임 4〕

월간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2019년  월  일 ~ 2019년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2019. . . ~ 2019. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

서산의료원 재무회계팀 귀하